Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
IMPLANTAÇÃO DO DE ALAMBRADO	SINAPI -	23,43%	Desonerado:	
DE CERCAMENTO DO	03/2025 - Acre		embutido nos preços	
ESTACIONAMENTO TÉRREO	SBC - 03/2025 -		unitário dos insumos	
	Acre		de mão de obra, de	
			acordo com as	
			bases.	

Porcentagem	54,48%	45,52%	
Custo	123.040,23	102.801,65	
Porcentagem Acumulado	54,48%	100,0%	
Custo Acumulado	123.040,23	225.841,88	

Cronograma Físico e Financeiro
Item	Descrição	Total Por
Etapa	30 DIAS	60 DIAS	
1	SERVIÇO PRELIMINAR	100,00%
1.131,06	100,00%
1.131,06		
2	INSTALAÇÕES INICIAIS E CANTEIRO
DE OBRA	100,00%
19.107,55	100,00%
19.107,55		
3	ALAMBRADOS, PORTÕES E PRE-
INSTALAÇÕES DE MOTORES	100,00%
205.603,25	50,00%	50,00%
102.801,63	102.801,63	

IVO WICIUK JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 10043753-2
Outros