1 - DADOS	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUINF/DIPED MAPA DE RISCO		
	
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DIGITAL NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PURUS/AC	
Município: SANTA ROSA, ACRE	
Endereço: RUA 28 DE ABRIL, SANTA ROSA, ACRE	
Data: quarta-feira, 15 de outubro de 2025	
	
TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO	

RISCO DE PROJETO

RISCO DE PROJETO

RISCO DE PROJETO	Alteração de projeto (básico) por determinação do	Atraso no Cronograma e
contratante. Mudança na concepção.	elevação dos custos de	Aditivo Contratual
projetos e obras

Alteração de projeto feita por entidades públicas ou	Atraso no Cronograma e
órgãos ambientais, por omissão do projeto básico	elevação dos custos de	Aditivo Contratual
projetos e obras

Impossibilidade de execução da obra sem o devido	Atraso no Cronograma e
remanejamento de redes da Energisa/SAERB/Fibra	elevação dos custos de	Aditivo Contratual Ótica desconhecidas		projetos e obras	
Contratada

Contratada

Contratada	

RISCO GEOLÓGICO	Acréscimos de serviços para	Atraso no cronograma
contenção de sinistro	Elevação dos custos de	Aditivo Contratual
obra	
Contratante	

RISCO METEOROLÓGICO	

Refazimento de serviços ou paralizações motivados por questões climáticas	

Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	

Cláusula Contratual: para chuvas nas médias histórias dos últimos 10 anos, a contratada já prevê os custos.
Acima da média histórica a Contratante responde.	

Contratada	

LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
Não obtenção de licenças para canteiros e bota fora. Necessidade de complementação de estudos	
Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	Responsabilidade do Contratado obter todas as licenças em todas as esferas governamentais	

Contratada	

RISCO AMBIENTAL	
Eventuais exigências do Departamento Estadual de Meio Ambiente, não previstas.	Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	Responsabilidade da Contratada a perfeita execução dos planos da LAI	
Contratada	

RISCO AMBIENTAL	
Possibilidade de descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio	Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	
Aditivo Contratual	
Contratante	

RISCO AMBIENTAL	
Possibilidade de descobertas de áreas contaminadas com necessidade de remediação	Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	
Aditivo Contratual	
Contratante